Problema degli Ordini

Progetto: modello a cascata
Durata del Progetto: 3 mesi circa (90 gg circa)

Tabella Task

Nome		Descrizione				Durata (giorni)	Dipendenza (nome)
	
A0		inizio progetto				1gg		nessuno

A1 		interviste in azienda (8 ruoli)			10gg		A0 (FS)
M0		milestone: fine interviste
A2		definizione requisiti 				14gg		A1 (SS)
M1		milestone: controllo documento requisiti
A3 		definizione specifiche 				10gg 		A2 (FS)
M2		milestone: controllo documento specifiche
A4		definizione strategia di progetto			5gg		A3 (FS)
M3		milestone: riunione per architettura di progetto 
A5 		progettazione sistema				12gg 		A4 (FS)

A6 		progettazione sottosistema			16gg		A4 (FS)

A7 		progettazione moduli				20gg		A4 (FS)

A8 		progettazione funzioni				24gg		A4 (FS) 
M4		milestone: visione progetti
A9		realizzazione (codifica) di unità			30gg		A5 (SS), A6 (SS), A7 (SS), A8 (SS)
M5		milestone: visione codice
A10		test e integrazione				20gg		A9 (FF)
M6		milestone: verifica (specifiche sono rispettate)
A11		installazione e collaudo			20gg		A10 (FS)
M7		milestone: validazione (requisiti sono rispettati)
A12		fine progetto 				1gg		A11 (FS)					

Tabella Risorse

Elenco Risorse 		Tempo Massimo di Impiego		Tariffa
analista 1 		33% 				standard 500 €/gg 		straordinario 550 €/gg
analista programmatore 1 	100% 				standard 400 €/gg		straordinario 450 €/gg
esperto programmatore 1 	100% 				standard 300 €/gg		straordinario 350 €/gg
esperto programmatore 2 	100% 				standard 300 €/gg		straordinario 350 €/gg
esperto sistemi 1		50% 				standard 450 €/gg		straordinario 500 €/gg

Totale: 464000 € (circa)